Załącznik nr 2
ZAKRES PRAC ADAPTACYJ NYCH

1.	Wykonanie ekspertyzy stropu w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania aparatu RTG. 
2.	Wykonanie niezbędnych projektów oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń i odbiorów, w tym Sanepidu oraz pozwolenia na użytkowanie.
3.	Wykonanie nowych ścian działowych zapewniających podział pomieszczenia na trzy części – pracownia RTG, sterownia, kabina pacjenta.
4.	Przeniesienie umywalki jeśli taka konieczność wyniknie z nowo 
5.	utworzonych pomieszczeń.
6.	Wykonanie zabezpieczenia wentylacji do przepisów ppoż.
7.	Wykonanie projektu osłon stałych.
8.	Wykonanie osłon stałych zgodnie z projektem, wraz z dostarczeniem i zamontowaniem drzwi ochronnych i okna ochronnego.
9.	Wymiana wykładziny na antyelektrostatyczną wraz z niezbędnymi pracami w zakresie przygotowania i wyrównania podłoża.
10.	Wymiana grzejników na higieniczne.
11.	Dwukrotne malowanie ścian wraz z wykonaniem niezbędnych napraw.
12.	Wykonanie sufitu podwieszanego w wykonaniu higienicznym.
13.	Wymiana oświetlenia. Nowe oświetlenie w suficie podwieszanym z możliwością przyciemniania.
14.	Wykonania zasilania aparatu RTG zgodnie z wymogami producenta aparatu, wraz z tablicą rozdzielczą. Instalacja zasilająca musi obejmować również m.in. lampę ostrzegawczą, przycisk włącz/wyłącz oraz wyłączniki awaryjne. Konieczne jest sprawdzenie czy obecny kabel z rozdzielni głównej budynku zapewni wymagane przez producenta aparatu RTG parametry zasilania. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań konieczna jest wymiana kabla na spełniający wymagania.
15.	Dostosowanie obecnej wentylacji do sufitu podwieszanego.
16.	Wykonanie instalacji i gniazd zasilających w sterowni i pracowni.
17.	Wykonanie instalacji i gniazd sieciowych w sterowni, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci Szpitala.
18.	Zapewnienie niezbędnych pomiarów i protokołów we wszystkich branżach, koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
19.	Wymiana wejściowych drzwi ochronnych do pracowni.
20.	Demontaż rolet okiennych.
21.	Montaż rolet okiennych przyciemniających.